南伊豆町週休２日推進工事実施要領

（趣旨）
第１条　この要領は、建設産業における担い手の確保及び育成のため、南伊豆町が発注する建設工事において、週休２日を確保する工事（以下「週休２日推進工事」という。）について必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要領において用いる用語は、次のとおりとする。
（１）　週休２日　対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
（２）　対象期間　工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。
（３）　現場閉所　対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。
（４）　現場閉所率　対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）をいう。現場閉所率が28.5％以上を４週８休以上、25％以上28.5％未満を４週７休以上４週８休未満、21.4％以上25％未満を４週６休以上４週７休未満とし、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
（対象工事）
第３条　週休２日推進工事の対象は、土木工事標準積算基準書により積算する土木工事、電気通信設備工事及び機械設備工事とする。ただし、次に掲げる工事を除く。
（１）　施工に必要な実日数（実働日数）が30日以下と見込まれる工事
（２）　通年維持工事、災害復旧工事（改良復旧工事を含む。）
（３）　発注機関の長が対象工事に適さないと判断する工事
（発注）
第４条　発注者は、南伊豆町週休２日推進工事特記仕様書（様式第１号）を添付し、４週８休以上の達成を前提とした補正係数により費用を計上して発注する。
（実施方法）
第５条　週休２日推進工事の実施方法は、次のとおりとする。
（１）　受注者は、現場着手日までに４週８休以上を満たす現場閉所計画表（様式第２号）を監督員に提出し、これに基づき施工する。なお、工事現場において看板により週休２日推進工事である旨を掲示する。
（２）　受注者は、現場閉所計画に変更が生じた場合は、その都度変更の現場閉所計画表を監督員に提出する。なお、週休２日を確保するための工期延長は認めない。
（３）　監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、現場閉所率について確認を行う。なお、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められない場合には、現場閉所率に応じた費用計上による変更契約を行うものとする。
（４）　前３号で掲げる事項については、入札公告等で提示する特記仕様書に明記する。
（費用の計上）
第６条　発注者は、静岡県週休２日推進工事積算要領、静岡県週休２日推進工事（建築工事）積算要領を準用し、費用の計上を行うものとする。
（委任）
第７条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
この要領は、令和５年８月１日から施行する。